109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

영동군에서 ‘19년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2019년 집행사업비	2020년	2021년 이후
29건	1,041	12	113	483	433			12%
월류봉 둘레길 2단계조성사업	35		14	21		2020	2019	40%
찾아가는 문화예술공연	1		1			2019	2019	100%
영동복합문화예술회관 문화공연	1			1		2019	2019	0%
영동군 복지시설 부지조성공사	40		1	39		2020	2019	3%
지역에너지 신산업활성화 지원사업	34			8	26	2021	2019	0%
영동읍 지중화 사업	40		19	6	15	2021	2019	48%
영동그라운드골프장 돔 설치공사	20		1	19		2020	2019	5%
노근리사건 70주년 추모식 및 글로벌 평화포럼	18		3	15		2020	2019	17%
영동군 통합관제센터 재난상황실 신축사업	55		5	27	23	2021	2019	9%
힐링관광지 아열대 온실조성사업	43		43			2019	2019	100%
치매전담형 노인요양시설 및 주야간보호시설신축	80			80		2020	2019	0%
반다비체육센터 건립사업	72			40	32	2021	2019	0%
학촌~마곡간 도로확포장공사	28	6	5	9	8	2021	2019	39%
구교로 전선지중화사업	40		5	30	5	2021	2019	13%
영동일라이트 지식사업센터 건립	150				150	2022	2019	0%
영동농협 일반APC 지원사업	84	4		45	35	2021	2019	5%
송호관광지 일원 주차장 조성사업	30			10	20	2021	2019	0%
제17회 추풍령 가요제	2		2			2019	2019	100%
충북도민체육대회 참가	2		2			2019	2019	100%
영동포도전국마라톤대회	1		1			2019	2019	100%
읍면 주민화합행사	1		1			2019	2019	100%
전국장사씨름대회	2			2		2020	2019	0%
협회장기 소프트 테니스 대회	1			1		2020	2019	0%
영동군 가족센터 건립	44		8	18	18	2021	2019	18%
영동군 육아종합 지원센터건립	36			36		2021	2019	0%
도마령~힐링타운 숲길조성	20			5	15	2022	2019	0%
힐링타운 무장애 나눔길조성사업	20			6	14	2022	2019	0%
용두공원 사면경관 조성사업	50		1	34	15	2021	2019	2%
송호관광지 기반시설 확충사업	91	2	1	31	57	2021	2019	3%

(단위 : 억원, %)

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2019년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘19년말 기준으로 작성

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

월류봉 둘레길 2단계 조성사업

담당자

국악문화체육과

신태주(☎740-3212)

□ 사업목적 및 필요성

○ 월류봉~반야사 L=8.3km 월류봉 둘레길 조성 2018. 8월 준공되었으나 지역

주민의 추가 노선 요구와 기반시설 부족으로 2단계 사업을 진행

○ 신규 둘레길 조성, 주차장 및 편의시설 추가 설치로 관광객 편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3. ~ 2020. 12.

○ 위 치 : 황간면 완정리 완정교 ~ 반야사 일원

○ 규 모 : 둘레길 L=3.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,500	0	1,448	2,052	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,500	0	1,448	2,052	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 월류봉 둘레길 1단계 사업 완료(’17. 5. ~ ’18. 8.) : 2018. 08.

○ 실시설계용역 착수                             : 2019. 02. 20.

○ 기술자문위원회 개최(데크자재 등)              : 2019. 05.

○ 주민설명회 의견 수렴                          : 2019. 06.

○ 실시설계용역 완료                             : 2019. 10. 29.

○ 공사 착공                                    : 2019. 11. 04.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                    : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

찾아가는 문화예술 공연

담당자

국악문화체육과 나은경(☎740-3203)

□ 사업목적 및 필요성

○ 난계 박연 선생의 뮤지컬 공연으로 우리군 홍보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 12.

○ 내 용 : 자매도시, 인천남동구 외 4개 자치단체 공연 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	300	-	100	100	100
국 비
시 도 비
시군구비	300	-	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 05. 29. : 인천 남동구  공연, 청소년수련관 공연장,    430명

○ 2020. 06. 13. : 서울 강남구  공연, 강남구민회관 공연장,    500명

○ 2020. 06. 19. : 서울특별시   공연, 광진구 청소년수련관,    400명

○ 2020. 05. 29. : 경기 오산시  공연, 오산문화예술회관,       900명

○ 2020. 08. 23. : 서울 서대문구 공연, 서대문구 문화체육회관, 500명

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

영동복합문화예술회관 문화공연

담당자

국악문화체육과 장예나(☎740-3207)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영동복합문화예술회관 개관에 따라 다양한 문화 복지 서비스 제공을 통해 지방 문화예술 진흥과 풍요로운 문화예술을 향유하게 함으로써, 군민의 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 5월 ～ 2019년 12월(8개월)

○ 위 치 : 영동군 영동복합문화예술회관(영동읍 영동힐링로 117)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :       100 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	100		100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2019. 08.: 뮤지컬 「꽃신」 공연

○ 2019. 10.: 동화발레 「잠자는 숲속의 미녀」 공연

○ 2019. 11.: 뮤지컬 「앤 더 넘버」 공연

□ 향후계획

○ 현재 코로나19로 인해 영동복합문화예술회관 미운영

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음.

사업명

영동군 복지시설 부지조성 공사

담당자

주민복지과 윤주식(☎740-3565)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영동군 노인복지관 부지를 확장하여 복지시설 집적화 도모

○ 향후 영동군 장애인전용 건강생활지원센터를 신축하여 취약계층 복지 증진 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 448-3 외 4필지 일원

○ 규 모 : 조성면적 8,129㎡

- 사업량 : 발파암 64,546㎥, 토사 4,053㎥, 사면구조물 설치  2,122㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	-	367	3,833	800
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	450	-	18	432	-
시군구비	4,550	-	349	3,401	800
기타(기금)	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 2019. 01. 영동군 복지시설 부지 조성 공사 계획 수립

○ 2019. 02. 지방재정투자 심사

○ 2019. 02. 공유재산 심의

○ 2019. 05. 부지 조성공사 경계측량

○ 2019. 09. 지반조사용역 준공

○ 2020. 03. 실시설계 용역 준공

○ 2020. 05. 부지 조성 공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 05. 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 기존 4,000백만원 → 변경 5,000백만원

- 조성면적 8,129㎡(당초 조성면적 7,195㎡, 증 934㎡)

사업명

지역에너지 신산업활성화 지원사업

담당자

경제과 손완수(☎740-3712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 마을소유의 농촌마을 건물에 태양광발전소를 설치하여 소득을 배분하는       스마트 농촌마을 나눔발전소 건립

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ~ 2020. 3.

○ 위 치 : 관내 마을창고 71개소

○ 규 모 : 태양광 1,225㎾

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,428백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,428		3,428
국 비	816		816
시 도 비	245		245
시군구비	571		571
지 방 채
민간자본	1,796		1,796
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2018. 12. : 19년 지역에너지 신산업 활성화 지원사업 협약체결

○ 2019. 01. : 협약체결

○ 2019. 03. ~ 11. : 실시설계 및 전기사업(태양광) 허가

○ 2020. 02. : 보조금 교부결정

○ 2020. 02.~ 06. : 태양광 설치

○ 2020. 06. : 지방비 사업정산 및 보조금 지급

□ 향후계획

○ 국비정산 신청 (충북태양광사업협동조합 → 한국에너지공단)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

영동읍 지중화 사업

담당자

도시건축과 강인호(☎740-3362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시구역 내 난립된 전신주 및 공중선이 중심시가지의 도시 미관을 저해하고 있어 전선지중화 사업으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 재난 취약 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 영동읍 계산리 소화의원~중앙지구대, 영동문화원~세무서

○ 규 모 : L=1.2km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,000	-	4,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,500	-	2,500	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,500	-	1,500	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019. 05. 20.        : 협약체결(영동군 ↔ 한전 등)

○ 2019. 06. 04.        : 주민설명회 개최(영동읍사무소)

○ 2019. 10. ~ 11.      : 도로 굴착 및 관 매설

○ 2019. 12. ~ 2020. 3.  : 내선 및 인입 공사

○ 2020. 04.            : 도로 재포장 및 차선도색 완료

○ 2020. 04.            : 전선 및 전주 철거

○ 2020.  6.            : 공사 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

영동그라운드골프장 돔 설치 공사

담당자

시설사업소 왕현호(☎740-5994)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영동그라운드골프장 돔 설치공사를 통해 체육시설을 확충하여 생활체육       활성화 및 군민건강 증진을 도모코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2020. 11.

○ 위 치 : 영동생활체육공원(영동읍 계산리 745번지 일원)

○ 규 모 : 돔(막구조⇒2,400㎡) 및 사무실(2층⇒134.64㎡) 증축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	52	1,948	-
국 비	600	-	16	584	-
도 비	700	-	18	682	-
군 비	700	-	18	682	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 2019. 09. : 충청북도 공공디자인 심의 및 실시설계완료

○ 2019. 12. : 생화체육공원 실시계획인가(변경)

○ 2020. 02. : 공사계약완료

○ 2020. 04. : 관련 인·허가완료(구조심의 포함)

○ 2020. 05. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2020. 10. : 공사준공

○ 2020. 11. : 그라운드골프장 사용개시

사업명

노근리사건 70주년 추모식 및 글로벌 평화포럼

담당자

시설사업소 윤상준(☎740-3477)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노근리사건의 인권과 평화의 가치를 전국화 세계화 할수 있는 다양한        프로그램을 개발해 그 의미를 되새기고, 부각시켜 미래가치를 승화시킬       수 있는 70주년 행사가 되도록 모색

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 4. ～ 2020. 12.

○ 위 치

- 관 내 : 영동군 일원 / 관 외 : 서울, 광주, 제주도 등 주요도시

- 해 외 : 미국 워싱턴 등

○ 규 모 : 2,089백만원(국비 830, 도비 400, 군비 859)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,089백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,089		362	1,727
국 비	830		100	730
시 도 비	400		200	200
시군구비	859		63	797
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)

○ 2019. 04. : 노근리 70주년 기념사업추진단 구성

○ 2020. 05. : 노근리사건 70주년 추모시, UCC 공모전 완료

○ 2020. 06. : 노근리 피해자 구술집 및 도록 발간 외 1개 사업 진행

○ 2020. 06. : 노근리사건 사진, 만화, 문서, 영상물 전시 진행

○ 2020. 07. : 노근리 평화 설치 미술전 완료

○ 2020. 07. : 제70주년 노근리사건 기념식 완료

□ 향후계획

○ 2020. 11. : 명사초청 토크 콘서트

○ 2020. 11. : 노근리 글로벌평화포럼

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (당초) 22개사업(2,000백만원) / (변경) 12개사업(2,089백만원)

사업명

영동군 통합관제센터 재난상황실 신축사업

담당자

안전관리과 성기창(☎740-3902)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산재한 재난 및 안전관리 시설을 집중화 하고 낡고 협소한 시설을 개선하여

○ 재난·재해 및 사건·사고 발생 시 신속하고 유기적으로 대응하여 군민의 생명과 재산을 보다 안전하게 보호하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 영동군 영동읍 동정리 산 9-13 (1,301㎡)

○ 규 모 : 지하1층, 지상2층 연면적 1,600㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,500	0	511	117	4,872
국 비	1,800	-	-	100	1,700
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	3,700	-	511	17	3172
기타(기금)	0	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도)

○ 2019. 06. : 공유재산관리계획 군의회 의결

○ 2019. 06. : 투자심사 심의의결

○ 2019. 09. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 05. : 충청북도 경관심의 의결

○ 2020. 06. : 건축물에너지효율등급 및 제로에너지 예비인증 용역 착수

□ 향후계획

○ 2020. 09. : 실시설계용역 완료, 예비인증 용역 완료

○ 2020. 10. : 계약심사 및 일상감사 의뢰

○ 2020. 12. : 공사계약 체결

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

힐링관광지 아열대 온실조성 사업

담당자

힐링사업소 이승호(☎740-3563)

□ 사업목적 및 필요성

○ 레인보우힐링관광지 내 사계절 아열대 과일을 체험해 볼 수 있는 녹색        힐링공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 9. ~ 2021. 9.

○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 141번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 7,900m2, 건물연멱적 1,663m2

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,000		5,200	2,800
시 도 비	1,300		1,300
시군구비	6,700		3,900	2,800

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 04. : 충북 지역균형발전 기반조성사업 신청

○ 2019. 06. : 충북 지방재정 투자심사 심의

○ 2020. 03. : 충북 지방재정 투자심사 재심의(사업비 증액)

○ 2020. 05. : 1회 추경예산 확보(2,800백만원)

○ 2020. 08. : 아열대온실 공사 발주

□ 향후계획

○ 2020. 09. : 공사 착공

○ 2021. 09. : 공사 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

구 분	위 치	기 간	사업비(백만원)	변경내용
당 초	매천리 31번지 일원	2019.09.~ 2020.12.	5,200	신소재 반영, 면적증가, 조경계획 확충 등
변 경	매천리 141번지 일원	2019.09.~ 2021.09.	8,000

사업명

치매전담형 노인요양시설 및 주야간보호시설 신축

담당자

주민복지과 박은실(☎740-3356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구 고령화와 치매인구의 증가로 치매환자가 안심하고 이용할 수 노인장기요양       시설 확충 및 치매노인의 공적보호를 통한 보호자 편익증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2022. 12월

○ 위 치 : 영동읍 설계리 54-3 (영동군립노인병원 주차장부지)

○ 규 모 : 치매전담형 노인요양시설 및 주야간보호시설 설치 1식

지하1층, 지상 4층 (바닥면적 500㎡, 연면적 2,500㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,744백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	8,744	0	0	3,544	5,200
국 비	2,834			2,834
시 도 비	213			213
시군구비	5,697			497	5,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 2019. 2월 : 기본계획 수립

○ 2019. 2월 : 공유재산 심의

○ 2019. 6월 : 지방재정투자 심사 (조건부)

○ 2020. 4월  : 공공건축 사업계획서 사전검토 승인 및 건축심의

○ 2020. 4월  : 지질조사 용역

○ 2020. 5월 : 조달청 설계공모 의뢰

□ 향후계획

○ 2020. 10월 : 설계 용역 계약 체결

○ 2021.  3월 : 공사 착공

○ 2022. 12월 : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 사업비 변경 : 기존 8,000백만원 → 변경 8,744백만원

☞ 변경사유 : 주차장 확장으로 인한 면적 증가로 사업비 증액

사업명

영동군 반다비체육센터 건립 사업

담당자

시설사업소 김정운(☎740-5992)

□ 사업목적 및 필요성

○ 건강한 체육활동을 통한 장애인의 삶의 향상, 장애인의 활발한 체육활동 참여로 정신건강 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2022.

○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 136번지 일원(영동체육공원 내)

○ 규 모 : 국민체육센터 생활밀착형(장애인형) 신축 1식(2,750㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,000		1,000	3,225	2,775
국 비	3,000		1,000	1,000	1,000
시 도 비	1,225			1,225
시군구비	2,775			1,000	1,775
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 지방재정투자심사 조건부 승인(충청북도)                 : 2019. 8.

○ 영동군 공유재산 관리계획 심의‧의결                     : 2019. 9.

○ 건축도시공간연구소 공공건축 사업계획 사전검토 심의     : 2020. 6.

○ 영동군 공공건축심의위원회 의결                         : 2020. 7.

○ 일반설계공모 조달청 의뢰                               : 2020. 8.

□ 향후계획

○ 계약심사 및 일상감사 추진                              : 2020. 12.

○ 공사착공                                               : 2021.  1.

○ 공사준공                                               : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경 없음.

사업명

학촌~마곡간 도로확포장공사

담당자

건설교통과 김영진(☎740-3542)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도로 확포장공사를 통해 원활한 교통소통으로 지역간 균형발전과 지역주민의 생활의 질 향상을 도모하기 위한 사업임.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 학산면 학산리 50-1번지 일원

○ 규 모 : 도로 확·포장공사 L=1.01km (폭6.5m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,350	750	300	1,300	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,350	750	300	1,300	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   70%)

○ 2018. 10. 하천협의 및 환경영향평가

○ 2019.  7. 일상감사 및 계약심사

○ 2019.  8. 지방재장투자심사

○ 2019. 11. 공사 착공

□ 향후계획

○ 2020. 12. 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

구교로 전선지중화 사업

담당자

도시건축과 강인호(☎740-3362)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시구역 내 난립된 전신주 및 공중선이 중심시가지의 도시 미관을 저해하고 있어 전선지중화 사업으로 깨끗하고 쾌적한 도시환경 조성 및 재난 취약 환경 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2020년

○ 위 치 : 이수초등학교 ~ 구교사거리 ~ 구교삼거리 ~ 군청 오거리

○ 규 모 : L=0.8km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,0280백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	4,028	-	1,050	2,978	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,428	-	550	1,878	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,600	-	500	1,100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 2018. 07. 19.   : 사업 신청(영동군⇒한국전력공사)

○ 2019. 07. 11.   : 추가 사업 승인(한국전력공사⇒영동군)

○ 2019. 08. 09.   : 업무협약(한국전력공사)

○ 2019. 04. 01.   : 업무협약(통신사업자들)

○ 2019. 10. ~ 12.  : 기초조사 및 실시설계용역 추진(한전)

○ 2020. 06.       : 공사착공

□ 향후계획

○ 2020. 12.       : 공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

영동일라이트 지식산업센터 건립

담당자

경제과 성수아(☎740-3727)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일라이트는 흡착과 항균 효과가 탁월하며 충북 영동군에 최대 매장

○ 일라이트 산업화 기반마련을 위한 거점 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023

○ 위 치 : 충북 영동군 용산면 한곡리 558(영동산업단지 內)

○ 규 모 : 부지 15,889㎡, 건축 연면적 8,254㎡(지상4층)

○ 내 용 : 일라이트 소재 기업 임대형 공장, 공동시설 구축 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	15,000			6,000	14,400
국 비	9,800				9,800
시 도 비	2,600			300	2,300
시군구비	2,600			300	2,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2019. 07. : 일라이트 지식산업센터 타당성 조사 용역완료

○ 2019. 10. : 지방재정투자심사 조건부 승인(국비 확보후 추진)

○ 2019. 11. : 2020년 중기지방재정계획 반영

□ 향후계획

○ 2020. 09. : 제3회 추경 설계비 6억 확보

○ 2020. 10. : 기본 및 실시설계 추진

○ 2020. 12. : 정부예산 확보

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

농산물유통센터(일반APC) 건립지원 사업

담당자

농정과 조성기(☎740-3471)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최신식 선별시스템 구축을 통한 규모화·집단화로 마케팅 및 교섭력 향상

○ 효율적임 물류시스템과 유통체계 개선 및 비용절감을 통한 농가소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ∼ 2021. 6.

○ 위 치 : 충북 영동군 영동읍 설계리 375-1번지 외 1필지

○ 규 모 : 건축면적 4,668㎡(기존 3,332㎡, 증축 1,336㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,560백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,560	-	-	2,127	3,433
국 비	1,668	-	-	960	708
시 도 비	834	-	-	250	584
시군구비	834	-	-	250	584
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,224	-	-	667	1,557
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계 완료                  : 2020. 6. 30.

○ 건축 인허가 및 기술검토 완료   : 2020. 8. 20.

□ 향후계획

○ 입찰공고 및 계약               : 2020. 9. 10.

○ 공사착공 등 사업추진           : 2020. 9. 11.

○ 준공 및 정산                   : 2021. 6. 30.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

송호관광지 일원 주차장 조성사업

담당자

국악문화체육과

조성민(☎740-3214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우리군 대표 관광지인 송호관광지와 양산팔경 금강둘레길을 찾는 관광객이

편리하게 이용할 수 있도록 부족한 주차공간을 확보하여 관광객의 이용·

편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 양산면 송호리 12-1번지 일원

○ 규 모 : 주차장 A=12,860㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,000	0	0	1,000	2,000
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	3,000	0	0	1,000	2,000
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : -%) ※토지보상 추진중

○ 공유재산관리계획 수립 및 지방재정투자심사 완료 : 2019.10.

○ 2020년도 본예산 편성(토지매입비 1,000백만원)    : 2019.12.

□ 향후계획

○ 하천점용 등 행정절차 진행 및 토지매입          : 2020.12.

○ 2021년도 본예산 편성(사업비 2,000백만원)        : 2020.12.

○ 공사 착공                                      : 2021.03.

○ 공사 준공                                      : 2021.12.

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

제17회 추풍령가요제

담당자

국악문화체육과 박상희(☎740-3202)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중부권 최고의 젊은 신인가수의 등용문으로 자리매김한 추풍령가요제를 전국가요제로 발돋움하는 계기 마련

○ 포도축제 기간 중 가요제를 개최하여 영동포도를 전국에 홍보하고 군민의 문화욕구 충족 및 군민화합의 장으로 승화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 8. 31.(토)

○ 위 치 : 영동군민운동장 특설무대

○ 규 모 : 인원 5,000여명 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	160	-	160	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	160	-	160	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019.  8. : 가요제 개최 완료

○ 2019. 11. : 보조금 정산검사 실시 완료

□ 향후계획

○ 문제점 및 발전방향 분석 (제18회 추풍령가요제 사업계획 시 반영)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

충북도민체육대회 참가

담당자

국악문화체육과 김영완(☎740-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 충북도민이 하나될 수 있는 만남과 화합의 기회 제공

○ 도민체육대회 준비를 위한 훈련으로 체력증진과 건전한 정신 함양

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 6. ~ 7.

○ 위  치 : 진천군 일원

○ 사업량 : 24개종목, 400여명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 210백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	210	-	-	-	210
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2020. 4. : 개최일정 변경(6월 ⇒ 10월)

○ 2020. 7. : 코로나19로 인해 대회 순연 개최

○ 2020. 9. : 대회 예산 전액 삭감(3회추경)

□ 향후계획

○ 연례반복 사업으로 2021년 사업 추진 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2020년 충북도민체육대회 취소로 당해예산 전액 삭감

사업명

영동포도전국마라톤대회

담당자

국악문화체육과 김영완(☎740-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 영동포도축제와 연계한 전국단위 마라톤대회 개최로 우리군 홍보 및

지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 8.

○ 위  치 : 영동군 일원

○ 사업량 : 마라톤대회 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	100	-	-	-	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2020. 6. : 코로나19로 인해 대회 취소 결정

○ 2020. 9. : 대회 예산 전액 삭감(3회추경)

□ 향후계획

○ 연례반복 사업으로 2021년 사업 추진 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2020년 영동포도전국마라톤대회 취소로 당해예산 전액 삭감

사업명

읍면 주민화합행사

담당자

국악문화체육과 김영완(☎740-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체육대회를 통한 읍면별 지역경제 활성화 효과 도모

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020년 연중

○ 위  치 : 각 읍면별 소재지

○ 사업량 : 읍면별 주민화합행사 각 1회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 115백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	115	-	5	-	110
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2020. 2. : 심천면 금강버들길 건강걷기대회 일부 추진

○ 2020. 3. : 심천면 금강버들길 건강걷기대회 취소 결정

○ 2020. 7. : 코로나19로 인해 주민화합대회 전체 취소 결정

○ 2020. 9. : 대회 예산 전액 삭감(3회추경)

□ 향후계획

○ 연례반복 사업으로 2021년 사업 추진 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2020년 읍면주민화합행사 취소로 당해예산 중 100백만원 삭감

사업명

전국장사씨름대회

담당자

국악문화체육과 김영완(☎740-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국단위 씨름대회를 유치하여 민족고유의 전통스포츠인 씨름의 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 11.

○ 위  치 : 영동체육관

○ 사업량 : 대통령기 전국장사씨름대회 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	200	-	-	200	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2020. 6. : 코로나19로 인해 대회 연기 결정(7월 ⇒ 11월)

□ 향후계획

○ 2020. 10. : 보조금 교부결정 및 지급

○ 2020. 11. : 대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 대회 개최 기간 변경

- 당초 : 7. 24. ~ 7. 30.  ⇒  변경 : 11. 13. ~ 11. 19.

사업명

협회장기 소프트테니스 대회

담당자

국악문화체육과 김영완(☎740-3232)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국단위 소프트테니스대회 개최를 통한 우리군 홍보

□ 사업개요

○ 기  간 : 2020. 3.

○ 위  치 : 영동군민정구장

○ 사업량 : 협회장기 소프트테니스대회 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	-	-	-	-	-*
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2020. 2. : 코로나19로 인해 대회 취소 결정

○ 2020. 9. : 대회 예산 전액 삭감(3회추경)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2020년 협회장기 소프트테니스대회 취소로 당해예산 전액 삭감

사업명

영동군 가족센터 건립

담당자

가족행복과 김철구(☎740-3752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일반, 다문화, 미혼·한부모 가족 등 모든 가족을 아우르는 가족센터를

건립하여 사회복지 전달체계 및 가족복지 인프라 구축

○ 다양한 도서 대여서비스 및 지역 주민과의 소통·교류를 위한 공간

(작은도서관) 조성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020년 ~ 2021년

○ 위    치 : 영동군 영동읍 부용리 379 (現 난계국악당 부지)

○ 규    모 : 연면적 1,350㎡ (지하 1층, 지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,625백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,625	-	-	1,012	2,613
국 비	1,612	-	-	862	750
시 도 비	450	-	-	150	300
시군구비	1,563	-	-	0	1,563

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2019. 09. : 생활SOC복합화(가족센터+작은도서관) 사업 선정(여가부, 문체부)

○ 2019. 10. : 가족센터 건립 계획 수립 및 공유재산 심의

○ 2019. 12. : 지방재정투자심사(자체심사) 및 중기지방재정계획 반영

○ 2020. 05. : 공공건축사업계획 사전검토(건축도시공간연구소)

○ 2020. 06. : 영동군 공공건축심의위원회 심의

○ 2020. 07. : 영동군 가족센터 건립공사 설계공모 의뢰(제안공모)

□ 향후계획

○ 2020. 09. : 기본 및 실시설계용역 계약(조달청) 및 착수

○ 2021. 01. : 기본 및 실시설계용역 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

영동군 육아종합지원센터 건립

담당자

가족행복과 함은영(☎740-3761)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 육아지원을 위한 거점기관을 조성하여 아이를 보육하기 좋은 환경을 만들고 보육교직원과 부모에 대한 상담 및 교육을 통해 어린이집 지원 기능과 가정양육 지원 기능을 총괄하는 One-stop 육아지원서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ～ 2021년 12월(2년)

○ 위 치 : 영동군 영동읍 매천리 529-135번지외 3필지

○ 규 모 : 부지면적 3,003㎡, 건축연면적 1,000㎡(지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	3,630			1,300	2,330
국 비	1,000			1,000	0
시 도 비	300			300	0
시군구비	2,330				2,330
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2019. 08     : 육아종합지원센터 건립 기본계획 수립

○ 2019. 10∼12 : 사전이행절차 완료(투자심사,공유재산관리계획,중기지방재정계획)

○ 2020. 05     : 제1회 추경예산 반영

○ 2020. 06     : 설계공모 의뢰(조달청-제안공모)

□ 향후계획

○ 2020. 11     : 기본 및 실시설계용역 완료

○ 2021. 01∼12 : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업위치

- 당초 : 영동읍 매천리 529-135번지외 3필지→영동읍 부용리379

○ 사업규모

- 당초 : 부지면적 3,003㎡, 건축연면적 1,000㎡(지상2층)

→ 부지면적 3,993㎡, 건축연면적 1,100㎡(지하1층, 지상2층)

사업명

도마령 ~ 힐링타운 숲길조성사업

담당자

산림과 송영규(☎740-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 숲길 주변의 환경 보전과 이용객의 만족도 제고를 위한 숲길 네트워크

구축 및 쾌적한 숲길 환경 조성을 위함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 용화면 조동리(도마령) ~ 영동읍 매천리(힐링타운) 구간 일원

○ 규 모 : 숲길조성(L=15.0km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	-	500	1,500
국 비	1,300	-	-	325	975
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	700	-	-	175	525
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 완료 및 감리용역 계약

○ 일상감사 및 계약심사 완료

○ 공사 집행(2020. 8.)

□ 향후계획

○ 공사 착수(2020. 9. ~ 11.)

○ 사업비 정산(2020. 12.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

힐링타운 무장애나눔길 조성사업

담당자

산림과 송영규(☎740-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 보행약자층이 편리하게 숲을 체험할 수 있도록 목제데크 등 산림체험활동

시설을 설치하여 숲 접근성 향상 및 신체적 건강증진에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년(3년)

○ 위 치 : 영동읍 매천리 산35-1번지 일원

○ 규 모 : 무장애나눔길 조성(L=2.6km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	2,000	-	-	585	1,415
국 비	1,200	-	-	351	849
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	800	-	-	234	566
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계 완료 및 감리용역 계약

○ 일상감사 및 계약심사 완료

○ 공사 집행(2020. 8.)

□ 향후계획

○ 공사 착수(2020. 9. ~ 11.)

○ 사업비 정산(2020. 12.)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

용두공원 사면경관 조성사업

담당자

도시건축과 송기용(☎740-3372)

□ 사업목적 및 필요성

○ 용두공원 사면에 주변 환경과 조화롭고 아름다운 경관시설을 개발하여 주민들에게 휴식의 공간 및 볼거리 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 영동읍 매천리 산3-6번지 일원

○ 규 모 : 비탈사면안정 및 경관정비 L=200m, H=50m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	5,000	-	500	500	4,000
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,000	-	500	500	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2019. 05.            : 기본설계 완료

○ 2019. 06.            : 지반조사용역 완료

○ 2019. 10.            : 지방재정투융자 심사 완료

○ 2019. 10.            : 정밀안전진단 및 실시설계 착공

○ 2020. 06.            : 사면 보강·보호공법 검토

□ 향후계획

○ 2020. 12.            : 공사 준공

○ 2020. 09.            : 실시설계 완료

○ 2020. 10. ~ 2021. 12. : 공사착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

송호관광지 기반시설 확충사업

담당자

국악문화체육과

조성민(☎740-3214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주변 관광자원과의 연계성 강화를 통해 관광지를 보다 편리하고, 안전하게

이용할 수 있도록 하여 관광 만족도를 제고하고, 재방문을 증가시킴으로써

관광산업 활성화와 더불어 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 3. ~ 2021. 2.

○ 위 치 : 양산면 ‘송호관광지~양산팔경 금강둘레길’ 구간

○ 규 모 : 보행교 L=288.7m, B=2.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2019년	2020년	2021년 이후
계	7,300	107	92	7,101	0
국 비	2,700	53	46	2,601	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	4,600	54	46	4,500	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 실시설계용역 착수                             : 2018.04.11.

○ 토질조사용역 착수                             : 2018.10.29.

○ 토질조사용역 완료                             : 2018.11.14.

○ 공법·자재 선정 기술자문위원회 심의 완료       : 2019.03.

○ 하천점용허가 협의                            : 2019.05.

○ 하천점용허가 완료(대전지방국토관리청)          : 2019.09.

○ 일상감사 및 계약심사 등 행정절차 이행         : 2019.10.

○ 실시설계용역 완료                            : 2019.12.04.

○ 공사 착공                                    : 2020.01.04.

□ 향후계획

○ 공사 준공                                    : 2021.02.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 9,100백만원(국비 2,700/ 군비 6,400)

- 변경 : 7,300백만원(국비 2,700/ 군비 4,500)

10-2. 지방채 발행사업

영동군에서 2019년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

영동군에서 2019년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.